מסמך ב - 1  - מסמך שינויים ותוספות בתנאי החוזה

424

מסמך ב' (לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה – אפריל 2005)

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ב1-לן כותרות הסעיפים של מסמך ב1- , הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם:

 1.	הגדרות
2.	דרכי ביצוע ולוח זמנים
3.	הביטוח
4.	הקשר עם קבלנים אחרים.
 5.	אספקת כוח אדם ותנאי עבודה.
6.	מועד השלמת המבנה
7.	תקופת התקשרות
8.	פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים.
9.	בדק, תיקונים ושירותים תשלומי ביניים
10.	 תשלומי ביניים
11.	 סילוק שכר החוזה
12.	תוכניות עדות
13.	אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה
14.	 המפרט הכללי.

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ב1- בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות, בצורה אחרת כלשהיא, את 

האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח התשס"ה - אפריל 2005 או במסמך אחר כאמור בו ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך   
האחר - יחולו הוראות מסמך זה.

_____________________
חתימת            הקבלן

1.	הגדרות
	בסעיף 1 של החוזה בסוף סעיף קטן (1) תתווסף ההגדרה שלהלן:
	"המתכנן" - פירושו: אדריכל, מהנדס או יועץ מקצועי איתו התקשרה הממשלה
  		        בקשר עם תכנון ו/או ייעוץ לצורך הקמת המבנה או כל גורם אחר
	                      לפי קביעת המנהל.

2.	דרכי ביצוע ולוח זמנים
              בסעיף 11 לחוזה, סעיף קטן 1 (א) יופיע הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 10 ימים מיום
              התחלת  הביצוע  הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים. 
	 בסעיף 11 לחוזה  אחרי סעיף קטן 1 (ב) יופיע 11 (ג): מוסכם ומובהר לקבלן כי שבוע 	עבודה יהיה בן 5 ימים והעבודה תתנהל כדלקמן: כניסה בין השעות   07.30  - 08:30 
              ועבודה עד השעה  16.30 .
             לא תתבצע עבודה באתר בימי  שבת , בערבי חג  ובחגי ישראל.

3.	הביטוח
	א.       פוליסה לביטוח עבודות קבלניות
		תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול 			ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות 		כדלקמן:
		(1)	ביטוח רכוש יכלול - ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מבנה" כהגדרתו 			בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.
		(2)	סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:
			(א)	סכום החוזה כולל מע"מ.
			 (ב)	ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה 				לקבלן,	בנוסף לסכום החוזה.
			  (ג)	הסכומים האמורים בס"ק1) ו - (2) יהיו צמודים ל- $ ארה"ב 				בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.
		(3)	פרק ביטוח אחריות צד ג' - יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן 
      המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.
		(4)	אנשים  שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי 			ביטוח לאומי,  ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.
		(5)	גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות:
			300,000 $ ארה"ב -למקרה אחד.

		(6)	ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות 			שהוציאו או  התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק 			נמנע ובין אם לאו, הכול בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 			-1981 .
		(7)	בפוליסה יכללו בביטוח רכוש ובביטוח צד ג' גם ציוד של הקבלן כולל 			ציוד כבד שנמצא בשימושו במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה.
		(8)	הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתגרמנה בגלל 			חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.
		(9)	הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה 				מתבצעות בתוך 	בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, 			הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך 			המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח -הממשלה אינו 			מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.	

	ב. 	פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
		תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה
		כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחייבויות		הקבלן עפ"י החוזה למי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר.
		בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן:
		(1)	גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.
		(2)	הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד 				מטעמם.
		(3)	הביטוח יכלול גם פיצוץ והריסה
		(4)	האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק כלפי 				עובד/מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח - חדש), פקודת הבטיחות
			בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק אחריות למוצרים פגומים.

	ג.	בכל הפוליסות הנ"ל
		(1)	יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל וכל קבלני המשנה.
		(2)	תקופת הביטוח תהיה מיום התחלת ביצוע המבנה כקבוע בצו התחלת
			העבודה ועד לתום תקופת הבדק.
		(3)	בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן
			נמסרה על כך לממשלה הודעה מוקדמת - 30 יום מראש לפחות.
			סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה  הביטוח
			תשמ"א - 1981 מתיר ביטול הפוליסה.

		(4)	בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה  
			להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים ששילמה לפי הסכם זה.
		(5)	בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי
			המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה  ביטוח על פי פקודת הנזקין (נוסח
                                        חדש), חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה,
			לרבות תקנות, כללים וצווים שהוצאו מכוחה.

	ד.	בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 19
		של החוזה - ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה,
		הצהרה בה הוא מתחייב , בין השאר:
		(1)	להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.
		(2)	להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של 				המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.
		(3)	להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן לממשלה 			הן לחברת הביטוח.

 4.	הקשר עם קבלנים אחרים 
בסעיף 30 של החוזה יוסף סעיף קטן חדש 30 (3) "לא תשולם תוספת כלשהי בגין עבודות קבלנים נוספים באתר.

5.	אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
	בסעיף 32 של החוזה יוסף סעיף חדש 32 (6):
	   "הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי ת.ז ישראלית ו/או עובדים זרים שיש ברשותם אישור    	העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים , שיעמדו בהצלחה בבדיקה ביטחונית
	מטעם הממשלה, באם תבקש הממשלה לערוך בדיקה שכזו. אי עמידת  מי  מעובדי	הקבלן בבדיקה זו, לא תפגע בביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה והקבלן ידאג
	לעובד חלופי שיעמוד בהצלחה בבדיקה הביטחונית".

6.	מועד השלמת המבנה

	א.	לעניין סעיף 41 (1) לחוזה - מועד סיום והשלמת המבנה יהיה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  אחד עשר חודשים קלאנדריים ממועד צו התחלת העבודה.
	ב.	בסעיף 41 של החוזה - בסוף הסעיף יבוא סעיף קטן (4) שלהלן:
		41 (4) "מוסכם בזה כי כל עבודה שמבצע הקבלן עבור הממשלה על פי חוזה
		אחר, לא תשמש עילה לעיכוב בהשלמת כל העבודות לפי חוזה זה.

7. 	תקופת ההתקשרות-
תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם זה הינה מיום_______ ועד ליום ______.
	 (להלן: "תקופת ההתקשרות").

8.	פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
	לעניין סעיף 45 של החוזה - סכום הפיצויים המוסכמים הוא  0.1%  משכר החוזה.

9.	בדק, תיקונים ושירותים
	למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה תקופת אחריות 			הקבלן לעבודות שביצע למשך 2 שנים.

10.	תשלומי ביניים
	א.	החשבון כאמור בסעיף 59 (1) של החוזה יוגש למפקח בתאריכים שבין ה1-
		ל5- של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, חשבון זה יוגש
		בארבעה עותקים.
		על הקבלן לצרף לחשבון:
		(1)	דפי כמויות, הניתנים למדידה מעבודות שבוצעו עד למועד אליו
מתייחס החשבון וכן ניתוח מחירים לעבודות חריגים אם היו כאלה בתקופת החשבון . 
		(2)	חשבונית מס כמוגדר בחוק ב2- עותקים הלקוחה מפנקס החשבונות של 			הקבלן, או כמאושר לו ע"י שלטונות המס במקרים מיוחדים לכל חשבון.
			חשבונית המס תהיה בגובה הסכום שאושר לקבלן לתשלום ותוגש ע"י 			הקבלן למנהל לאחר אישור החשבון, כמפורט בסעיף 59 (1) להלן.
			עותק אחד מחשבונית המס רשאי המנהל להעביר לשלטונות המס.
		(3)	בקשה לארכה במועד השלמת המבנה ו/או רשימת תביעות כאמור 				בסעיפים 42 ו51- לחוזה אם ישנן.	
			ג.	הערבויות האמורות בסעיף 58   של החוזה יומצאו ע"י הקבלן 				למנהל.   על הערבויות להתקבל אצל המנהל לא יאוחר מ15-				יום לפני המועד שנקבע לתשלום כל חשבון כאמור בסעיף.
	ד.	בסעיף 59 של החוזה אחרי סעיף קטן (8) יבוא סעיף קטן (90) 		שלהלן:
		59 (9) "כל חשבון וחשבונית על פי חוזה זה שיוגש ע"י הקבלן 		לאחר השעה 12:00 יירשם כאלו הוגש ביום העבודה הראשון 		שלאחריו".

11.	סילוק שכר החוזה	
	1.	החשבון הסופי והמסמכים הקשורים בו כאמור בסעיף 60 (1) של החוזה הם:
		א.	חשבון סופי, כולל תביעות סופיות - אם ישנן, ב4- עותקים .
		ב.	ניתוחי מחירים לעבודות חריגות, כולל המסמכים עליהם מבוססים 
			ניתוחי המחירים ב4- עותקים.
		ג.	דפי כמויות לכל סעיפי  החשבון, כולל דפי מדידה חתומים ע"י הצדדים,
			מסודרים וממוספרים עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון ב2- 				עותקים, דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.
		ד.	מאזן חומרים הכולל פירוט החומרים שקיבל הקבלן מהממשלה וחישוב 			החומרים  שהושקעו בביצוע המבנה ובצרוף כל הסימוכין הדרושים ב2- 			עותקים.
		ה.	כל התוכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע המבנה, פרט למערכת 				תוכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי, מערכת זו תוחזר בעת 			קביעת שכר החוזה.
		ו.	שני סטים של תכניות העדות חתומות ומאשרות ע"י המתכנן הרלבנטי.
		ז.	שלושה סטים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות הפעולה 				ואחזקה מונעת של כל הציוד כמפורט במסמכי החוזה.
		ח.	הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו.
ט.	ערבות לתקופת הבדק.

12.	 תוכניות עדות
	אם הקבלן לא ביצע את הנדרש במסמכי חוזה זה בעניין הגשת תכניות עדות יבוצע הנדרש
	באמצעות המנהל, על חשבונו של הקבלן, וכל ההוצאות הכרוכות בכך ינוכו מהתשלומים
	המגיעים לקבלן.

13.	אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה
	מוסכם בזאת בין הצדדים כי קשיים במציאת עובדים מתאימים, במידה וייגרמו לקבלן 	לא ייחשבו כ"סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה" או כ"כוח עליון" כמשמעותם 	בסעיף 65 (1) לחוזה ו/או בסעיף 42 (3) לחוזה.

14.	המפרט הכללי
	הקבלן מצהיר בזאת  כי נמצא ברשותו המפרט הכללי וכי קרא והבין את תוכנו, 
	קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות 	שבמפרט הכללי.     

          חתימת         הקבלן